실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2021년도-01

담당부서

작성자

개발사업본부
(사업계획처, 개발사업처, 마케팅처, 안전기술처)

(유흥민 / 063-440-6783 / mini8242005@sdco.or.kr)

사업명

새만금 수변도시(선도지구) 조성사업

사업개요

및

추진경과

⭕사업개요 : 국제협력용지 일원에 6.6㎢ 규모 스마트 수변도시 조성

⭕총사업비 : 1조 3,476억원*

＊통합개발계획 승인고시 기준(‘20.12.17.)

⭕사업기간 : 2019년 ~ 2024년(6년간)

⭕개발컨셉 : 자연 포용·기술 융합·사람 중심의 자족형 스마트 수변도시

⭕주요내용

구 분		세 부 내 용
위 치		새만금사업지역 국제협력용지 내 선도사업지구
사업량	전체규모	6,601,669m²(200만 평)
	세부내용	주거, 상업, 산업·업무, 관광용지 등 수변복합도시 개발

⭕추진경과

- ′17.12. 새만금 스마트 수변도시 조성방안 기본구상

- ′18.08. 예비타당성조사 착수
- ′19.05. 예비타당성조사 완료

- ′19.07. 타당성조사용역 완료

- ′19.08. 사업자지정 승인

- ′19.09. 기본 및 실시설계 용역 및 제영향평가 용역 착수

- ′19.11~′20.05. 새만금 수변도시 총괄자문회의 개최(8회차)

- ′20.05. 매립공사(실시설계·시공 일괄수행) 발주

- ′20.05. 토지이용계획 수립

- ′20.07. 새만금위원회(토지분과위원회) 경관심의 승인

- ′20.10.~′20.11. 실시설계 적격자* 선정 및 계약

＊계룡건설산업㈜, 대보, 한림건설, ㈜군장종합건설, ㈜태안건설

- ′20.12. 통합개발계획 승인(개발청) 고시

- ′20.12. 수변도시 매립공사 착공

사업수행자

(관련자 및 업무분담내용)

⭕사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무
본부장	강병재		′18.11.01. ~ 현재	개발사업 총괄
처장	나일재		′18.10.12. ~ 현재	개발기획 총괄
처장	백재현		′19.08.01. ~ 현재	토지개발 총괄
처장	권인택		′19.03.04. ~ 현재	마케팅 총괄
처장	김옥철		′21.01.04. ~ 현재	안전·기술 총괄
담당	강승균	차장	′19.03.04. ~ 현재	개발사업 기획
담당	박노준	차장	′21.02.15. ~ 현재	개발사업 기획
담당	임호선	차장	′19.03.04. ~ 현재	토지개발 사업기획
담당	정재영	차장	′18.10.12. ~ 현재	토지개발 사업기획
담당	서준석	차장	′19.03.04. ~ 현재	토지개발 사업기획
담당	이승율	차장	′19.03.04. ~ 현재	토지개발 운영기획
담당	박종서	차장	′21.02.15. ~ 현재	마케팅 기획
담당	서정현	차장	′21.02.15. ~ 현재	마케팅 기획
담당	최현민	팀장	′21.01.04. ~ 현재	안전·환경·보건 기획
담당	김영일	팀장	′19.03.04. ~ 현재	기술 기획
	유흥민	과장	′21.02.15. ~ 현재	용역관리 운영
	홍민주	과장	′19.03.04. ~ 현재	총사업비, 예산 운영
	문현승	과장	′19.08.01. ~ 현재	개발사업 운영
	우영윤	과장	′21.02.15. ~ 현재	토지개발 관리·운영
	고가희	과장(겸직)	′19.03.04. ~ 현재	토지개발 관리·운영 기술관리 운영
	이가람	과장	′20.08.01. ~ 현재	마케팅 운영
	김승준	대리	′21.02.15. ~ 현재	용역관리 실무
	김성태	대리	′21.02.15. ~ 현재	개발사업 실무
	김종진	대리	′19.03.04. ~ 현재	도시사업 실무
	정지원	대리(파견)	′21.02.15. ~ 현재	마케팅 실무
	김동성	사원	′20.12.14. ~ 현재	개발사업 실무
	송준범	사원	′20.12.14. ~ 현재	안전·환경·보건 실무

다른기관 또는 민간인 관련자

⭕ 새만금개발청

- 국제도시과 노유진 과장

- 국제도시과 진승섭 주무관

⭕설계사(용역사)

- 기본 및 실시설계 용역 : ㈜도화엔지니어링 컨소시엄*

＊도화엔지니어링, 건화, 동명기술공단, 지오스토리, 국성건설엔지니어링

⭕시공사

- 수변도시 매립공사 : 계룡 컨소시엄*

＊계룡건설산업㈜, 대보, 한림건설, ㈜군장종합건설, ㈜태안건설 / 설계사 : 유신, 서영

추진실적

⭕ 새만금 수변도시(선도지구) 조성사업 예비타당성조사

- (과업기간) ′18.08.03. ~ ′19.05.31.(10개월)

- (주요내용) 경제성 분석 및 종합평가 결과 사업시행 타당성 확보

⭕ 새만금 수변도시(선도지구) 조성사업 타당성조사 용역

- (과업기간) ′19.05.01. ~ ′19.07.29.(3개월)

- (계약금액) 130,800,000원

- (용 역 사) ㈜도화엔지니어링

⭕ 새만금 수변도시(선도지구) 조성사업 기본 및 실시설계 용역

- (과업기간) ′19.09.27. ~ ′22.09.26.(36개월)

- (계약금액) 12,085,000,000원

- (용 역 사) ㈜도화엔지니어링 컨소시엄*

＊도화엔지니어링, 건화, 동명기술공단, 지오스토리, 국성건설엔지니어링

⭕ 새만금 수변도시(선도지구) 조성사업 교통영향평가 용역

- (과업기간) ′19.09.02. ~ ′21.03.01.(18개월)

- (계약금액) 464,200,000원

- (용 역 사) ㈜동명기술공단

⭕ 새만금 수변도시(선도지구) 조성사업 환경영향평가 및 해역이용협의 용역

- (과업기간) ′19.10.23. ~ ′21.01.22.(15개월)

- (계약금액) 1,561,300,000원

- (용 역 사) ㈜이산

⭕ 새만금 수변도시(선도지구) 조성사업 도시기능 및 사업경쟁력 강화 용역

- (과업기간) ′19.09.23. ~ ′20.10.07.(12개월)

- (계약금액) 292,000,000원

- (용 역 사) PWC 삼일회계법인

⭕ 새만금 수변도시(선도지구) 조성사업 기본설계의 경제성(VE)등 검토용역

- (과업기간) ′20.02.28. ~ ′20.12.30.(10개월)

- (계약금액) 77,701,600원

- (용 역 사) ㈜화성엔지니어링

⭕ 새만금 스마트 수변도시 글로벌 교육기관 설립 및 투자유치 전략 수립 용역

- (과업기간) ′20.08.03. ~ ′21.02.01.(6개월)

- (계약금액) 93,500,000원

- (용 역 사) 삼덕회계법인

추진실적	⭕ 새만금 스마트 수변도시 글로벌 교육기관 설립 및 투자유치 전략 수립 용역 - (과업기간) ′20.08.03. ~ ′21.02.01.(6개월) - (계약금액) 93,500,000원 - (용 역 사) 삼덕회계법인 ⭕ 새만금 스마트 수변도시(선도지구) 매립공사(우선시공분) - (계약기간) ′20.11.16. ~ ′21.04.14.(5개월) - (계약금액) 3,249,000,000원 - (시 공 사) 계룡건설산업㈜, 대보, 한림건설, ㈜군장종합건설, ㈜태안건설 ⭕ 새만금 수변도시 사후환경영향조사 용역 - (과업기간) ′21.02.04. ~ ′25.04.13.(51개월) - (계약금액) 2,701,200,000원 - (용 역 사) ㈜동명기술공단, ㈜건일, ㈜소운이엔씨